(붙임1)

에티오피아 아다마 과학기술대학교 연구센터 건립사업 요약

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 에티오피아 아다마 과학기술대학교 연구센터 건립사업

(Establishment of the Centers of Excellence for Adama Science and Technology University Project)

◦ 차    주 : 에티오피아 정부(재무부) (Ministry of Finance)

◦ 사업실시기관 : 아다마 과학기술대학교 (Adama Science and Technology University)

◦ EDCF 지원금액 : 86백만불 이내 (총 사업비 : 108백만불)

◦ 사업 추진배경

- 에티오피아는 국가개발계획인 GTP* Ⅱ(‘16~’20년)에서 제조업 성장을 통한 중저소득국 진입을 목표로, 제조업 부문 성장견인에 필요한 과학기술 개발 및 과학‧기술인력 양성 등을 위한 연구기반 구축 등을 중점과제로 선정함.

* Growth and Transformation Plan, ‘25년까지 중저소득국 진입을 목표로 수립한 에티오피아 5개년 국가개발계획

- 이에 에티오피아는 GTP Ⅱ 및 과학기술 발전을 위한 과학기술대(이하 과기대) 설립·육성 정책* 등에 따라 기존 아다마 대학을 과기대로 전환(‘11년)한 바 있으며, 아다마 과기대의 3개년 전략계획(’16년) 등을 바탕으로 중점연구 분야에 대한 연구센터(Center of Excellence, COE) 설립**이 추진됨.

* 10개의 기술원(Institute of Technology, IoT)과 2개의 과기대(아다마 과기대 및 아디스아바바 과기대)가 설립됨

** 총 12개 연구센터 설립을 계획 중이며, 1단계로 현재 8개 연구센터 설립

구분	연구센터
1단계	제조공학 연구센터(CAME; COE for Advanced Manufacturing Engineering)
	자동차공학 연구센터(CTVE; COE for Transportation and Vehicle Engineering)
	재료공학 연구센터(CMSE; COE for Material Science and Engineering)
	전기전자공학 연구센터(CESE; COE for Electrical System and Electronics)
	제약 연구센터(IPS; Institute for Pharmaceutical Science)
	우주기술 연구센터(STI; Space Technology Institute)
	수자원관개공학 연구센터(CWRIE; COE for Water Resources and Irrigation Engineering)
	도시주택개발 연구센터(CUHD; COE for Urban Housing and Development)
2단계	미정

※

: EDCF 지원대상 연구센터

- 이러한 점을 감안하여 ‘16년 F/A 체결시, 에티오피아 정부는 아다마 과기대 교육‧연구 인프라 개선사업을 우선 지원후보사업에 포함시켰으며,  ’19.5월 본건 사업에 대한 EDCF 차관신청서를 제출함.

◦ 사업목적

- 아다마 과기대 5개 연구센터 앞 기자재 공급 등을 통한 연구․교육 인프라 개선

* 제조공학(CAME). 자동차공학(CTVE), 재료공학(CMSE), 전기전자공학(CESE), 제약(IPS)

- 산업과 연계된 과기대 운영지원을 통해 에티오피아 과학기술 및 산업발전에 기여

◦ 사업내용 및 범위

- 연구장비 및 기자재 공급, 시설개선, 역량강화 및 유지보수, 컨설팅 서비스

<표> EDCF 사업 범위

사업구성		내 용
본구매	연구장비 및 기자재 공급	- 제조공학 연구센터(CAME), 자동차공학 연구센터(CTVE), 재료공학 연구센터(CMSE), 전기전자공학 연구센터(CESE), 제약 연구센터(IPS) 관련 연구장비 및 기자재, 연구용 가구 등 공급 - 전사적 자원관리(ERP) 시스템 개발 및 구축 등
	시설개선	- 전기실 등 건축 및 연구동 건물 구조보강 - 연구실 내 기계설비 설치 - 연구단지 전기설비 교체 등 전력설비 개선
	역량강화 및 유지보수	- 전공분야별 초청 연수교육 - 장비전문가 및 연구센터별 교육전문가 파견 - 장비 및 시설 인계 후 2년간 유지보수 지원
컨설팅 서비스		- 장비도입계획 확정, 시설부문 상세설계, ERP 시스템 기본설계 - 본구매 입찰지원 및 실시감리(장비 검수, 시공, 역량강화) - 교육연구 및 기술자문, 각종 보고서 작성 지원 등

※ 세부내용은 향후 사업실시단계에서 변경 가능

◦ 사업실시기간 : 차관공여계약(L/A) 발효 후 총 57개월 (순 사업기간 54개월)

구 분	1차년도				2차년도				3차년도				4차년도				5차년도
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
1. 컨설턴트 고용(3개월)
2. 상세설계 및 입찰준비(6개월)
3. 공급자 선정(3개월)
4. 시공(공급) 및 감리(21개월)
5. 유지보수(24개월)

※ 상기 일정은 사업실시기관과 수출입은행의 상호합의 등에 의해 변경 가능

□ 사업실시지역

◦ 아다마 과기대는 수도인 아디스 아바바의 남동쪽으로 약 100km 떨어진 곳에 위치한 오로미아 주의 아다마 시에 위치해 있으며, 자동차 전용도로를 통해 이동할 수 있음.

◦ 수원국 자금으로 연구단지(Research Park)가 아다마 과기대 내 건설 중이며, 연구단지의 2개 연구동에 본 사업의 연구센터가 입주할 예정임.

사업실시지역 위치	사업부지 현황 (연구동 건설 중)